스마트공장 구축을 위한

사전 컨설팅 사업 추진계획

kdd

(중소벤처기업과)

스마트공장 구축을 위한 사전 컨설팅 사업 추진계획

1		필요성 및 추진방향

□ 필 요 성

ㅇ 성공적인 스마트공장 도입을 위해 제조 현장의 면밀한 사전 진단 및 스마트공장 구축 방향 설정

ㅇ 기업 내부의 장애요인(도입 거부)을 사전에 제거하고 기업 현실에 맞는 적정한 스마트공장 시스템 제시

□ 추진방향

ㅇ 스마트공장이 목적이 아닌 기업경쟁력 강화를 위한 수단으로 대안 제시

ㅇ 전문 마이스터를 현장에 파견하여 기업 맞춤형 솔루션 제시

〈진행 절차〉

1단계	수준진단	➡	2단계	도입기술 검토	➡	3단계	구체화컨설팅	➡	4단계	최종보고

2		사업개요

ㅇ 사업기간 : 2019. 8. ~ 12.

ㅇ 대    상 : 도내 중소․중견 제조기업 75개사 내외(신규구축 55, 고도화 20)

ㅇ 사 업 비 : 400백만원(신규구축 275, 업그레이드 80, 관리비 45)

ㅇ 지원규모 : 기업당 신규구축 5백만원 내외, 고도화 4백만원 내외

ㅇ 주요내용 : 수준진단, 도입기술 검토, 구체화 컨설팅, 최종보고

ㅇ 신청자격

- 공고일 현재 전남에 사업장(공장)이 소재한 중소･중견 제조기업으로스마트공장을 구축예정이거나 기 구축을 완료한 기업

< 선정 제외기업 >

① 부도, 휴･폐업중인 기업, 워크아웃, 기업회생절차 등 구조조정 대상 기업

② 공고일 현재 국세 및 지방세 체납 기업, 채무불이행자로 등록된 기업

③ 유흥･향락업, 숙박･음식점, 불건전 오락용품 제조업

④ 그밖에 중대한 기업윤리에 어긋난 행위를 한 기업

3		세부 추진계획

□ 컨설팅(진단분석) 지원

ㅇ (신규구축) 스마트공장 미 구축 기업으로‘20년 신규사업 참여 희망기업

- 사 업 량 : 55개사

- 사 업 비 : 275백만원

- 지 원 액 : 컨설팅(진단분석) 비용 기업당 최대 5백만원

* 기업당 지원 : 834,000원(일 단가) × 6회(일) = 5,004,000원

- 주요내용 : 마이스터(고급) 현장 파견(기업당 6회)

- 참여조건 : 스마트공장 신규 보급사업에 우선 참여 확인서 제출

ㅇ (고도화) 스마트공장 기 구축기업으로‘20년 고도화 참여 희망기업

- 사 업 량 : 20개사

- 사 업 비 : 80백만원

- 지 원 액 : 진단분석비용 기업당 최대 4백만원

* 기업당 지원 : 834,000원(일 단가) × 5회(일) = 4,170,000원

- 주요내용 : 마이스터(고급) 현장 파견(기업당 5회)

- 참여조건 : 스마트공장에 고도화 사업 우선 참여 확인서 제출

ㅇ 컨설팅(진단분석) 내용 및 절차

추진단계	세부 추진 내용
1단계	□ 수요조사 및 공장 기본 수준진단 (1MD) - 신청 기업의 현황 분석(업종, 주요 생산제품, 기업규모, 경쟁사 등) - 전략, 업무프로세스, 시스템 연계정도 등 기업 수준 진단 - 전직원 대상 스마트공장 기본개념 교육(인식제고 교육) 실시
□
2단계	□ 스마트化 도입 기술 검토 및 지도 (2MD) - 진단 결과(공장, 업무현황) 스마트화 도입 기술 분석(방법, 필수기능 등)
□
3단계	□ 스마트공장 구축 구체화 컨설팅 실시 (2MD) - 도출된 기업 업무 프로세스 효율이나 스마트 도입 기술을 분석하여 스마트 공장 구축을 위한 로드맵 수립 - 스마트 공장 구축에 필요한 사전 개선과제 도출 및 지도수행
□
4단계	□ 최종보고 (1MD) - 중소기업 경영진 대상 최종보고회 및 최종 결과보고서 제출 - 스마트공장 사업계획서 작성 및 사업 참여 지원

□ 추친체계 및 역할

					총괄기관 : 전라남도
					사업 계획 수립 등 총괄
		주관기관((재)전남테크노파크)						참여기관(한국표준협회)
		□ 대상기업 모집･평가･선정 □ 사업비관리 및 집행						□ 컨설팅(진단분석) 사업 시행 □ 사업결과 보고서 작성

ㅇ (총괄기관) 전라남도

- 사업계획 수립 총괄, 사업 진도 점검 및 사업비 관리 총괄

ㅇ (주관기관) (재)전남테크노파크(전남 스마트제조혁신센터)

- 대상기업 모집공고, 평가, 선정

- 사업 추진상황 점검 등 사업 추진상황 관리

- 사업비 관리(예산집행, 사업비 정산 등)

- 사업비 : 45백만원(공고, 홍보, 평가 등)

ㅇ (참여기관) 한국표준협회

- 선정기업 진단분석 및 기반구축 추진(마이스터 파견)

- 사업결과 보고서 작성, 사업비 정산서 제출

- 스마트공장 사업계획서 작성 및 사업참여 지원

- 사업비 : 355백만원(신규구축 및 고도화 컨설팅 75개사)

* 신규구축 컨설팅 : 55개사(275백만원)

* 고도화 컨설팅 : 20개사(80백만원)

ㅇ 기관간 협약체결          *협약서 별첨

- 협약주체 : 전라남도 - (재)전남테크노파크 - 한국표준협회

- 주요내용 : 사업의 신의성실 및 청렴의무 준수, 사업비 지급운영 등

□ 예산계획

(단위 : 천원)

비 목 별		도 비	비 율	비고
합 계		400,000	100%
직 접 비		392,350	98.1%
	기업지원비(컨설팅)	355,000	88.8%	한국표준협회
	내부인건비(3명)	22,250	5.6%	전남TP
	연구활동비(평가수당 등)	6,000	1.5%	전남TP
	연구과제추진비(회의비 등)	6,850	1.7%	전남TP
	연구수당	2,250	0.6%	전남TP
간접비(사무관리, 여비 등)		7,650	1.9%	전남TP

□ 지원절차

① 사업공고	➡	② 기업모집	➡	⑤ 사업추진	➡	④사업결과보고	➡	④사업비지급
전라남도, 전남TP		전라남도, 전남TP		전남TP 한국표준협회		한국표준협회		전남TP→ 한국표준협회

□ 신청기업 평가

ㅇ 평가방법

- 선정평가 : 사업신청서 등 서류평가를 통한 기업 선정

ㅇ 평가위원회 구성

- 구성인원 : 5명 이내(관련 전문가)  별도구성

* 평가위원회 구성, 평가지표 등 평가 세부계획은 전남TP에서 수립 추진

ㅇ 평가 및 선발                          * 평가표 별첨

- 총점 100점에서 70점 이상을 획득한 기업중에서 고득점자 순으로 선발

완성도(30점) : 최고책임자의 의지, 본 사업의 이해도

② 적정성(20점) : 계획수립 여부, 정보수집 및 분석활동 수행여부

사업성(20점) : 문제해결의 시급성, 실현가능성

④ 인력인프라(15점) : 책임자 확보 및 전담팀의 전문성

⑤ 기대 효과(15점) : 기대효과 및 타 공정으로의 수평전개 가능성

□ 신청방법 및 제출서류

ㅇ 신청서 제출 : (재)전남테크노파크 스마트제조혁신센터

ㅇ 제출서류

- 사업신청서, 참여의사확인서, 개인정보의 수집･이용에 관한 동의서, 사업자등록증명원, 공장등록증명서, 국세 및 지방세납세증명서,  2017~2018년 재무제표증명원

□ 추진일정

사업 공고		□ 전라남도, (재)전남테크노파크, 시․군		‘19. 7. 29.~8. 14.
□
신청ㆍ접수		□ (재)전남테크노파크(스마트제조혁신센터)		'19. 8. 14. 까지
□
선정평가		□ 선정 평가		‘19. 8. 16~ 8. 21.
□
지원대상 확정		□ 지원대상 기업 확정		‘19. 8. 23.
□
사업수행		□ 사업수행		'19. 8. 26.~12. 31.