[별지 제1호서식]

정책실명제 중점관리 대상사업 내역서

①사업부서	환경보전과	②담당자 (연락처)	류미아(470-2337)
③정책사업명	생태하천 복원사업
④선정기준	5억원 이상의 공사	⑤사업기간	2010∼ 2014(5개년)
⑥주요내용	❍ 추진목적 및 배경 - 영암천 및 도포천에서 발생되는 점ㆍ비점오염물질 유입으로 인한 심각한 자연 생태계 훼손 및 악취 발생으로 인한 주민 불편 초래 - 수질개선 및 생태기능을 회복하고, 수변녹지공간 및 휴식 공간을 확보하여 주민에게 친숙하고 쾌적한 생활공간 제공 ❍ 사업기간 : 2011. 5. 24 ∼ 2014. 12. 31 ❍ 위 치 : 영암읍 용흥리 영암천, 도포면 성산리 도포천 ❍ 사 업 량 : L = 5.3㎞(영암천 3.2, 도포천 2.1) - 수질정화습지 2개소, 자연형여울 9개소 및 취수보 2개소, 생태탐방로 L=1,192m 등 ❍ 총 사업비 : 9,900백만원(국비 6,930, 군비 2,970)/7:3비율 - 2012년 까지 : 3,531백만원(국비 2,472, 군비 1,059) - 2013년 확보액 : 3,743백만원(국비 2,870, 군비 873) - 2014년 확보계획 : 2,626백만원(국비 1,588, 군비 1,038) ❍ 시 공 사 : 용진종합건설(주) 대표 김한섭 ❍ 공 정 율 : 77%

<기재항목>

① 사업부서 : 사업을 수행하는 부서명을 기재

② 담당자 : 사업 담당자 및 사업부서장을 직급(직위)과함께 기재

③ 정책 사업명 : 추진하는 정책사업명을 기재

④ 선정기준 : 정책실명제 중점관리 대상사업으로 선정한 해당 기준을 기재

⑤ 사업기준 : 사업의 시작 및 종료 시점 기재

⑥ 주요내용 : 사업의 목적 또는 추진배경, 추진계획 및 주요 추진 상황(예산포함) 등 사업 전반에 대해서 구체적으로 기재

[별지 제3호서식]

정책실명제 사업관리이력서

정책실명제

등록번호

기획감사실 부여

담당부서

작성자

(환경보전과 / 환경미화시설팀)

(류미아/470-2337/sunsu8822@korea.kr)

정 책 명

생태하천 복원사업

사업개요

및

추진경과

○ 추진배경

- 영암천 및 도포천에서 발생되는 점ㆍ비점오염물질 유입으로

인한 심각한 자연 생태계 훼손 및 악취 발생으로 인한 주민

불편 초래

- 수질개선 및 생태기능을 회복하고, 수변녹지공간 및 휴식   공간을 확보하여 주민에게 친숙하고 쾌적한 생활공간 제공

○ 추진기간 : 2010. 1. 1 ∼ 2014. 12. 31

○ 총사업비 : 9,900백만원

○ 주요내용

- 수질정화습지 및 수질정화수로 조성, 자연형 취수보 및

여울조성, 생물서식처 및 생태탐방로 조성

○ 추진경과

- 2008. 9. 19 : 타당성조사 및 기본계획 수립 완료

- 2009. 2. 9 ∼ 5. 9 : 기본 및 실시설계용역

- 2010. 12. 22 : 영산강유역환경청 사전환경성검토 완료

- 2010. 6. 18 ∼ 12. 30 : 환경부 기본 및 실시설계검토 완료

- 2010. 12. 30 : 전남도 심의위원회 설계심의

- 2011. 2. 25 : 전남도 계약심사

- 2011. 5. 23 ∼ 2013. 9. 2 : 1․2․3차분 공사 준공

- 2013. 11. 15 ∼ 현재 : 4차분 공사 추진중

정책수행자

(관련자 및

업무분담 내용)

○ 최초 입안자 및 최종 결재자

- 최초 입안자 : 지방시설7급(직급) 김대웅(성명)

- 최종 결재자 : 지방시설5급(직급) 김영일(성명)

○ 사업 관련자

구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)
주무관	김대웅	지방시설7	2009.1.1∼2012.1.1	생태하천복원사업
주무관	이종진	지방시설7	2012.1.2∼2012.8.26	〃
주무관	류미아	지방시설7	2012.8.27∼현재	〃
팀장	한상효	지방환경6	2009.8.12∼2010.8.22	〃
팀장	류기봉	지방환경6	2010.8.23∼2012.1.1	〃
팀장	김종국	지방시설6	2012.1.2∼2012.8.26	〃
팀장	김승일	지방시설6	2012.8.27∼현재	〃
실과소장	김영일	지방시설5	2010.1.1∼2011.12.31	〃
실과소장	김종현	지방행정5	2012.1.1∼2013.6.30	〃
실과소장	조갑수	지방행정5	2013.7.1∼현재	〃

다른기관 또는

민간인 관련자

○ 외부 관련자

- 설계자 : 서영엔지니어링(주) 박지수

- 시공자 : 용진종합건설(주) 김한섭