정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	안전건설과	②담당자 (연락처)	부서장 : 안전건설과장 조영율 담당자 : 지방시설7급 이상용 (470-2419)
③정책사업명	재해위험지구 정비 (서창 재해위험지구 정비사업)
④선정기준	• 5억 이상의 사업 • 주민복지증진에 기여			⑤사업기간	2013. 06. 25 ~ 2015. 06. 24
⑥주요내용	◯ 필 요 성 집중호우시 저지대 상습침수 지구로서 군민의 생활불편과 재산적 손실에 대한 항구적인 대책이 시급해 정비 필요 ◯ 공사현황 - 위 치 : 영암군 삼호읍 서창리~학산면 독천리 일원 - 공사개요 : 호안정비 L=1.49km 가동보2개소, 교량1개소 - 공 사 비 : 금7,782,000천원 (도급액:3,776,520/관급자재대:2,636,280/기타1,369,200) - 계 약 자 : 남해종합개발 대표 김응서 ◯ 지금까지 추진실적 - 2011. 12 : 사전환경성 검토용역 발주 - 2012. 02 : 기본계획 및 실시설계 용역발주 - 2012. 06/12 : 기본계획 및 실시설계 주민설명회 개최 - 2012. 12./2013.02 : 소방방재청 실시설계 심의 사전 협의 - 2013. 05. 03 : 실시설계 완료 - 2013. 05. 15 : 공법심의회 완료 - 2013. 06. 04 : 계약방법 심의 완료 - 2013. 06. 10 : 전남도 계약심사 완료 - 2013. 06. 25 : 총괄분 착공 - 2014. 06. : 1차분 준공, - 2015. 02. : 2차분 준공 - 2015. 01. : 3차분 착공 ※ 현공정율 : 90%