정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	투자경제과	② 담 당 자 (전화번호)	김 상 철 (470-2363)
③정책사업명	영암특화농공단지 조성사업
④선정기준	시설비 5억이상 사업	⑤사업기간	2011~2015(5년)
⑥주요내용	▣ 추진배경 ❍ 농촌지역의 균형발전과 농외소득원 개발을 통한 농가소득 증대 도모 ❍ 중소기업체에 쾌적하고 저렴한 산업단지를 제공하여 새로운 일자리 창출과 지역경제 활성화에 기여 ▣ 사업 계획 ❍ 위 치 : 영암군 영암읍 망호리 48번지 일원 ❍ 사 업 량 : 식품특화단지 조성 116,311㎡ ❍ 사 업 비 : 10,700백만원 (지특 2,463, 도비 176, 군비 8,061) ❍ 공장용지 분양 : 2015. 7. ∼ 2015. 12. ❍ 공사 준공 : 2015. 12. ▣ 주요 추진사항 ❍ 농공단지 지정 및 실시계획 승인 : 2014. 2. 23 ❍ 분양가격 결정 : 2014. 4. 15 ※ 분양가격 [60,190원/㎡ (199,000원/평)] ❍ 토목공사 착공 : 2014. 5. 12 ❍ 관리기본계획 승인(전라남도) : 2014. 5. 15 ❍ 무연분묘 개장공고(2회) : ‘14.6.20(1차), 7. 30(2차) ❍ 진입도로 개설공사 설계용역 : ‘14. 9. ∼ 12. ※ 토지매입 : 84필지 116,311㎡ 중 83필지 115,331㎡ (99％)